『창원 수소액화플랜트 구축 공사 설계/시공감리 용역』

과  업  지  시  서

2021년 02월

제 1 장 용역 일반사항

1.1 과업의 목적

본 과업은 건설기술진흥법 제39조 및 동법시행령 제57조에 의거하여

설계감리 및 시공감리 용역을 시행하여 설계품질확보 및 시공품질을

확보 될 수 있도록 내실 있는 설계 및 시공관리를 하는데 목적임

1.2 과업의 개요

가. 용 역 명 : 창원 수소액화플랜트 구축 설계/시공감리 용역

나. 위    치 : 창원시 성산구 귀곡동 558-1(두산중공업 창원공장 부지 내)

다. 면    적 : 19,750㎡

라. 공사금액 : 74,000백만원(부가세 별도, 총액확정분)

1) 해외 플랜트사 주기기 : 33,000백만원

2) 주변기기 및 부대설비 : 41,000백만원

마. 공사기간 : 착공일로부터 ~ 2022년 12월 31일

바. 감리기간 : 착수일로부터 ~ 2022년 12월 31일

사. 감리대상

1) 주기기 설계 도면 검토 및 승인

⦁ 글로벌 플랜트사 주기기 설계 도면 검토 및 승인

⦁ 시공사 제출 설계 도면 검토 및 승인

2) 시공감리

⦁ 관계법령에 근거하여 시공사 절차서 작성 운영 및 설계/시공기준

적합성 검토

1.3 과업의 범위

⦁각종 관련 계획과 계산 기준(시방서, 지침, 법규 등) 적용의 적합성 검토

⦁과업에 적용되는 관련 법령을 검토하여 작성 운영 및 설계 기준, 시공기준

(표준 및 전문시방서)의 적합성 검토

⦁설계(안)의 적정성 검토

⦁적용공법 및 사용재료와 각종 성능개선 형식 선정의 적합성 검토

⦁부속시설(환기설비, 조명, 방재설비, 배수시설, 조경 등) 설치의 적정성검토

⦁설계도면과 구조계산의 일치 및 적정여부(철근배근 적정여부 등 포함)

⦁설계도서의 누락 오류

⦁불명확한 부분에 대한 추가 정정 지시

⦁도면작성의 적정성 검토

⦁공사시방서의 적정여부에 대한 검토

⦁수리계산서 및 부하계산서의 적정여부에 대한 검토

⦁주요 구조물의 구조계산서의 적정성 검토

⦁유지관리 설계의 적정성 검토

⦁내진설계 여부 검토

⦁각종 설계도서간 (보고서, 시방서, 도면, 구조계산서, 부하계산서, 내역서,

수량산출서 등)의 일치 여부 확인

⦁“설계자(시공자)”가 “발주처”에 직접 협의, 승인 요청토록 한 사항에

대한 검토

⦁시공의 적정성 및 유지관리 계획의 적정성 확인

⦁적정 및 최적설계안 유도여부 검토

⦁적정한 설계조직과 인원을 운영토록하고 그에 따른 자문

⦁정기 건설사업관리 결과보고

제 2 장 과업지시서

1. 설계감리 (Owner’s Engineering)

1.1 과업범위

본 사업의 원활한 사업수행과 적기준공을 위한 사업주지원 역무로서 그 주요

내용은 아래와 같다

1.2 세부 역무 내역

가. 설계 개선사항 제출서류 검토

나. 시공사(설계사)의 EPC 계약서 검토

1) 기술사양서 및 계약서 내용 검토

2) 계약일반조건 중 기술사항 검토

다. EPC 제출도서 검토 및 발주자 기술지원 업무

계약자가 작성, 제출한 도면, 각종 계산 및 기술자료 등 플랜트 건설품질과

안전을 위한 기본 및 실시설계 제출도서를 ‘제출도서 검토 및 승인’의

내용에 따라 검토한다.

1) 설계기준서 및 설계계산서 등 각종 설계도서

2) 기술규격서 – 기자재 구매규격 등 각종 기술규격서

3) 각종 승인용 도면

4) 배치도, 설비구성도, 계통도 등 각종 계통 구성도서

5) EPC 사와 기술/설계관련 Coordination 역무

○ 주요 설계도서 (추후 시공사가 제출하는 Approved Document List에 따름)

(1) 기계/배관 분야

- 설계 기준서

· Fire Water Tank

· Flare Stack

· Cooling Tower

· Demineralization Package

· N2 Generation Package

· IA Compressor Package

· NG Compressor

· Cooling Water Pump

· Hoist & Crane

· Waste Water Pump

· 소방설비 분야

· PMC

· 주요 배관 배치

- 설계 계산서 및 검토서

· 각종 용량 계산서

· 배관경 및 압력손실 계산서

· 기기 용량 계산서

· 주요배관 응력해석

· Pipe Line List

· Valve List

- 설계도면

· VP Review

· PFD/P&ID

· 기기배치도 및 평면도

· 배관 표준도 및 상세도

· ISO DWG

· 배관지지물 위치 및 표준도

· 전체 소방설비 계통도 및 평면도 (전기실/기계실 및 주요설비)

(2) 전기/계측제어 분야

- 주요 설계기준서

· 지중송배전선로

· 전력계통설비

· 계통보호설비

· 피뢰설비 및 접지설비

· 소방

· 통신

· 제어 및 감시설비

· 현장 계측제어기기

- 주요 설계 계산서 및 검토서

· 22.9kV 지중 송전선로 허용 전류 계산서

· 전력변환장치 용량 게산서

· 변압기 용량계산서

· 차단기 및 개폐기 용량 계산서

· 전력계통 단락용량 계산서

· 전력계통 전압강하 용량 계산서

· 지중 송전/전력계통 구성검토

· 접지 및 피뢰 설계 검토서

· 대지저항측정 검토서 / 접지 & 피뢰 설계 계산서

· 방폭설계 검토서

- 주요설계 계산서

· 조도계산서

· 접지 & 피뢰 설계 계산서

· Cable Size 계산서

- 설계도면

· 상세 평면도 & 배치도

· 전기실 / 기계실/ 운전실 기기배치도

· 송전선로

· Cable Line 도면

· 제어논리도

· Electrical Power Layout

· Cable Schedule

· Interconnection Diagram

· Cable Tray & Conduit Layout

· Grounding DWG.

· Hazardous DWG

(3) 토목/건축 분야

- 설계기준서

· 토목구조물 기초

· 우배수 기본계획

· 도로 기본계획

· 지반 보강계획

· 건축물

- 토목

· 토목 도면 검토

· 수리계산서 검토

· 포장단면 계산서 검토

· B/M 검토

- 건축

· 건축 및 구조도면 검토

· 구조계산서 검토

· B/M 검토

· Equipment 기초 도면 및 구조 검토

· 철골 Shop dwg. 검토

· 시방서 검토

라. 준공도서 검토

1) 각종 절차서 및 지침서 검토

2) 준공도면(As-Built) 및 전자파일 검토

3) 종합 용역보고서

4) 설비 Data Book

마. 문서 및 자료관리

1) EPC 제출도서에 대한 문서관리 절차서 검토

바. 현장시험 업무지원 (필요시)

1) 예비점검 및 시운전, 신뢰성 시험, 성능시험 시 참석 및 지원

2) 현장시험 절차서 검토

3) 현장시험 결과보고서 검토

사. 기자재 제작 품질검사 업무 (제외)

1) 기자재 제작 품질검사 입회 검사 업무는 제외하며, 발주처의 요청 시

추후 상호 협의하여 수행

1.3 제출도서의 검토 및 승인

가. 검토 및 승인

1) 발주자에게 제출된 공정표, 기본검토서, 승인용도면 및 기술규격서 등은

본 계약에 별도 명시가 없는 한, 발주자가 접수한 날로부터 아래 각 목의

기일이내에 검토 승인토록 한다. 단, 승인에 특별히 장시간이 요하는 도

서는 발주자의 승인을 얻어 승인기간을 조정할 것임.

- 승인용 도서 – 10일

- 기술규격서 – 10일

- 재 승인용 도서 – 7일

2) 발주자가 검토 의뢰한 도면 및 서류는 7일 이내에 검토, 보고한다.

3) 발주자가 재작성 요청한 도면 및 서류는 특별한 사유가 없는 한 발주자의

반려일로부터 7일 이내에 보완 또는 재 작성하여 승인 요청한다.

4) 계약자(감리업무 수행자)는 발주자가 용역결과에 대한 설명 또는 근거

자료를 요청할 시에는 이에 성실히 응한다.

1.4  월간진도보고서 작성

계약자는 과업 착수일로부터 용역 종료 시까지 다음 각 목의 사항을 포함한

매월의 과업 시행 사항 및 활동사항을 명시하여 제출한다.

가. 제출시기 : 매월 말일 기준 하여 익월 7일까지

나. 보고내용

1) 기술 인력현황 및 조직

2) 각종 도서 수발내용(승인사항 포함)

3) 역무수행 중요내용 및 미결사항

4) 용역공정표

5) 사업종합공정표

6) 설계수행상 주요 문제점 및 대책

7) 품질관리활동

8) 익월작업계획서(월간공정 및 작업수행계획 등 포함)

9) 기타 발주자의 지시사항 및 중요하다고 판단되는 사항 등

1.5  기 타

가. 본 과업지시서에 명기하지 않은 사항은 상호 협의하여 처리하되, 협의가

이루어지지 않을 경우 발주자의 의견을 따른다.

나. 발주자의 사정에 의하여 과업내용이 변경될 경우 이에 응하도록 한다.

다. 계약자는 과업수행과정에서 수집된 모든 자료에 대해서 보안을 유지하

여야 하며, 발주자의 동의 없이 자료를 외부에 제공하지 아니 한다.

2. 시공감리

2.1 과업내용

가. 건설기술진흥법에 의한 건설사업관리업무

나. 전력기술관리법에 의한 전기공사 감리업무

다. 소방시설공사업법에 의한 소방시설공사 감리업무

라. 정보통신공사업법에 의한 정보통신공사 감리업무

마. 공사관계 규정에 의한 감리업무

2.2 과업범위

창원 수소액화플랜트 건설공사에 대한 기계, 배관, 토목, 건축, 전기, 계측, 통신, 소방 등 설계 도서에 표기된 전반적인 공사에 대하여 적용하되, 본 과업지시서에 명기되지 아니한 사항은 건설기술진흥법 및 건설사업관리 업무지침서 (국토교통부 고시)등 기타 관계법령 등에 의한다.

2.3 과업의 착수

가. 계약자는 과업 착수전 과업수행계획서를 제출 한다.

나. 과업수행계획서에는 용역비 산정 근거, 감리 수행계획, 월별 감리원투입

계획, 감리원의 명단 및 자격등급, 경력 사항 등의 내용이 포함되도록 한다.

다. 계약자는 발주자의 착수 요구일에 과업을 착수해야 한다.

2.4 감리원 배치기준

가. 현장배치 감리원은 분야별 배치시점 이전에 발전소 건설 및 감리수행

경험이 있는 자격을 구비한자를 선임 한다.

나. 감리원의 최소배치 인원수는 계약서에 첨부된 감리원배치계획에 따라서

현장에 투입하여야 하며, 감리원 배치계획의 변경이 필요한 경우 발주자의

사전승인을 득하도록 한다.

다. 감리원수 산정은 공종 및 공사기간을 고려한 감리인원으로 하며, 계약자는

단장을 선임하여 감리를 총괄 운영토록 한다.

라. 각 등급별 감리인원은 필요한 감리인원을 산정 배치하며, 기 배치된

감리원을 교체 시는 발주자의 사전 승인을 받도록 한다.

마. 공사 착공 전 설계도서의 검토 등 사전준비와 공사 준공 후 준공 처리

업무를 위하여 감리원을 투입도록 한다.

바. 발주자의 “공사계획 인가” 신청에 필요한 감리원 배치 신고를 발주자의

요청에 따라 공사계획인가 신청 전에 완료하고 배치신고서를 제출한다.

2.5 감리방법

가. 근무지침

1) 계약자는 감리업무를 수행함에 있어 본 공사의 1) 설계도서, 계약문서,

기타 관계서류 등의 내용을 충분히 숙지하고 본 발전설비의 특수성을

파악한 후 감리업무에 임하도록 한다.

2) 계약자는 본 공사가 설계도서, 공정계획서, 발주자의 지시사항, 계약문서

기타 관계서류의 내용대로 시공 및 이행되는지 여부를 검토 확인하고,

특히 단계별 사전검측을 실시하여 우수한 품질로 시공되도록 감리에 철

저를 기하여야 하며 EPC사 기타 공사시공자에게 품질, 공정, 안전, 시공,

환경관리 등에 필요한 기술지도, 감독 및 의견을 제시하도록 한다.

3) 본 공사와 관련하여 기기류의 기종 및 공법의 변경 등 중요한 기술적인

사항에 대하여 발주자로 부터 검토 요구시 계약자는 적시 검토 후 의견

서를 제출하도록 한다.

4) 계약자는 공사현장에 문제점이 발생하거나 시공과 관련된 중요한 사항의

결정을 위하여 발주자의 요구가 있을 때에는 합당한 대책을 강구하여

그 내용을 서면으로 제출하도록 한다. 이 경우 그 대책에 하자가 있어

그로 인한 공사의 품질저하 또는 예산낭비 등 손해가 발생한 때에 계약

자는 그에 대한 일체의 책임을 진다.

5) 발주자는 감리원의 자질이 부족하거나 과실을 범한 경우 또는 감리원

으로서 적합하지 않다고 판단되는 경우와 감리업무 수행과 관련하여 품위

유지를 준수하지 못한 경우 이를 교체 요구할 수 있으며, 계약자는 당해

감리원을 즉시 교체하도록 한다. 또한 계약자는 교체된 감리원을 본 용역

수행을 위하여 다시 채용할 수 없다.

6) 계약자는 공사시공과 관련된 각종 인.허가사항을 포함한 제반 법규 등을

EPC사 기타 공사시공자로 하여금 준수토록 지도.감독 및 확인하도록

한다.

7) 계약자는 기기 시운전이 원활히 진행될 수 있도록 단위공사 사전 확인

등을 수행하며, 시운전 및 상업운전 지연이 발생되지 않도록 관리한다.

나. 공사착공 전/후의 업무내용

1) 공사 착공 전

- 시공계획 및 공사관리의 적합여부 확인

- 공정표의 검토

- 공사도급계약의 협력(EPC 계약의 이행감독 및 지원)

- 제반 설계도서 검토, 각종 인.허가사항 및 관계기관 협의 지원

- 설계자 검토 및 조정

- 공사시공자와의 업무협력

- 경계 측량 실시 확인 및 검토의견서 제출

2) 공사 착공 후

- 공사가 설계도면 및 시방서의 내용에 적합하게 시공하는지 확인 및 검측

- 시공계획 및 공사관리의 적정여부의 확인

- 경계 명시 측량실시 확인 및 검토의견서 제출

- 세부공정표의 검토

- 상세시공도면의 적합성 검토.확인

- 구조물의 위치와 규격의 적정여부의 검토.확인

- 품질시험 실시여부 및 시험성과의 검토.확인

- 설계변경의 적합여부의 검토.확인 및 검토의견서 제출

- 공사현장의 유해위험 방지시설, 재해예방대책 및 안전관리의 지도, 감독

및 확인

- 감리 주간, 월간, 분기, 완료보고서 작성, 제출 및 유지관리지침서 작성

제출 검토

- 기성금 및 준공금 검사/확인 및 검토의견서 제출

- 구조물과 각종배관 및 장비류의 접속에 대한 적합성 검토/확인

- 하도급에 대한 타당성 검토/확인 및 검토의견서 제출

- 도급자재 수급일정 및 적정성 검토/확인

- 기타 공사감리 계약으로 정하는 사항

- 공사 관련 공정 및 기성고 등 사정 및 검토확인

- 유해위험방지계획서, 안전관리계획서 제출/심사/확인

- 준공설계도서 검토/확인 및 발주자와 준공검사 시행

- 기타 발주자의 검토 및 의견제시를 요구하는 사항 등

- 현장 입고자재에 대한 검수 및 관리

- 전력시설물 관리, 규격 및 자재 관련 검토

다. 공사감리업무의 세분

1) 설계도서의 검토

- 제반설계도서를 검토.확인하여 상호간에 불일치한 사항, 불명확한

사항 등을 EPC사 기타 시공사, 설계자와 협의 후 그 결과를 발주자에

통보한다.

- 구조도와 관련된 설계도서

- 특기 및 일반시방서

- 공법의 적정성

- 관련 설비공사의 내용과 공정

- 사용재료 및 제작기간

2) 기성금 및 준공금 검사.확인

공사진행 및 완료 상태를 확인하고 계약문서에 의하여 기성금 및 준공금

청구에 대한 적정성을 검사

- 기성금 청구서 (EPC사가 제출한 기성금 지급 청구 검사)

- 준공금 청구서 (공사 완료에 의한 최종 지급 청구 검사)

- 기자재 기성 청구서(EPC사가 제출한 기자재기성 청구서 검사)

- 각 단계별 기성금 분석·관리, 사업 진행 단계별 예산 편성·배정 등

업무 지원

- 설계 및 공사 공정률 산출 지원

3) 시공지도 및 관련 도면과 일치여부 시공확인

4) 현황조사

- 가 계약자는 현장조사 및 피해방지대책 ) 사항에 대하여 시공 전에

EPC사가 조사대책을 수립한 사항에 대하여 검토, 협의한다.

· 현장조사 사항

· 안전관리 대책수립 사항

- 계약자는 현지확인 결과 당초 설계내용의 변경이 필요한 경우에는 EPC사,

발주자와 설계변경에 관련된 내용을 협의한다.

5) 감리업무 착수준비

- 계약자는 공사착수 전에 당해 공사와 관련된 다음 사항을 감리 사무실에

비치하고 숙지하도록 한다.

· 공사허가서 및 허가도서 사본

· 설계도 및 시방서

· 자재 품질 및 규격관리 기준

· 공사계획서

· 지반조사서

· 도급계약서 및 자재납품 계약서

· 각종 공문 사본

· 필요한 각종 서식류, 발간물

6) 공사착공 시 확인사항

- 계약자는 공사 착공 전 다음 사항을 검토.확인하고 감리계획서 및 감리

의견서를 작성한다.

· 공사허가 내용과 부합되는지 여부(교통/환경영향평가 사항포함)

· 현장기술자 자격, 경력 및 배치계획

· 공정관리계획(PERT/ CPM)의 검토

· 각종 품질시험계획의 검토

- 계약자는 감리용역을 수행하는 동안 다음 기록을 작성, 서명하여 비치

한다.

· 감리일지

· 기술 검토서

· 계약자가 제시한 의견

· 시정지시서에 대한 이행 결과

· 감리원 출근관리 대장

· 회의록

· 기타 비치서류는 협의에 의한다.

7) 공정관리

- 공정계획의 검토

· 계약자는 EPC사의 공정관리계획이 공사의 종류, 특성, 공기 및 현장의

실정 등을 감안하여 수립되었는지를 검토, 확인하고 시공의 경제성과

품질확보의 적합성 등을 검토 한다.

· 계약자는 계약된 공기 내에 건설공사가 완료될 수 있도록 공정계획을

검토하도록 하며 공사진행에 관하여 다음 사항을 사전에 점검하여 공사

진행상 문제가 있다 판단되는 경우에는 발주자에 의견을 제시한다.

(1) 세부공정계획

(2) 공사시공자의 현장기술자 및 장비확보 사항

(3) 기타 공사계획에 관한 사항

- 주요 공종 공사추진계획 및 관리

· 주요공종 관리 계약자는 EPC사가 제출하는 예정공정표상의 주공정선

표시, 주요공종에 대한 착수, 종료시점 및 소요기간 등 합리성을 검토

한다.

· 공사 준비사항 사전점검 주요공종 공사착수 전에 시공 준비 상태를

점검하며, 미흡한 사항에 대하여 EPC사에게 개선을 촉구하고 협의한

내용의 이행 여부를 문서로 검사, 감독, 확인한다.

· 공사관리 EPC사로 부터 주요공종에 대하여 다음의 공사추진 세부

계획서를 제출받아 검토한다.

(1) 공사추진계획(월별)

(2) 자재수급 및 인력동원계획

(3) 장비투입계획

(4) 공정률 및 준공검사 관리

(5) 공정보고

8) 현장시공관리

- 시공확인

· 계약자는 주요공종별, 단계별로 시공규격 및 수량이 설계도서의 내용과

일치 하는지를 검사하고 확인된 부분에 대하여 다음공정을 착수하게

한다. 시공규격 및 수량 등 시공현황이 설계도서의 내용과 서로 다른

경우에는 시정사항을 기록 시정하도록 통보하고 EPC사가 계약자의

지적사항을 조치 완료한 후 그 결과를 계약자가 재확인하여 다음 공

정을 착수하게 한다.

· 계약자는 정기적으로 EPC사의 공사일지를 검사, 확인 한다.

· 계약자는 적합한 사용자재, 시공품질 등의 검사항목을 도출하고 이에

따라 시공과정 또는 완료상태와 자재시험 결과를 적정하게 시행되었

는지 검사, 확인하여 불합격된 부분은 공사시공자에게 시정.통보한다.

· 구조적 안정성과 집단민원이 발생할 수 있는 주요공종의 검사, 확인

결과는 해당 공종의 공사가 종료되는 즉시 EPC사로부터 제출 받아

문서화하여 기록을 유지한다.

- 주요공종 입회 공사시공 중 건설공사의 품질확보를 위하여 품질관리가

요구되는 주요 공종의 시공과정에 입회/확인, 검사 및 지도/감독한다.

- 공사 중 사진촬영 공사시공 중 주요공사에 대해서는 기술적 판단자료

로 활용할 수 있도록 사진 촬영(발주자의 요구가 있는 경우 비디오 촬

영)하여 보관한다.

9) 품질관리

- 각종 재료의 확인

계약자는 시공 전에 설계도서의 각종 재료를 검사, 확인한 후 이의 변경이

필요한 경우에는 발주자와 협의하여 EPC사에 통보한다.

- 자재의 선정

· 계약자는 EPC사에게 자재선정에 관한 사항을 제출하게 하여 적합성

여부(규격, 품질, 색상 등)를 검토/확인한다.

· KS 표시품을 우선 사용토록 하되 KS가 없는 품목은 설계도서에 명시된

품질 등을 검토해서 공사의 품질이 확보되도록 협의 및 지도감독한다.

· 선정된 견본품은 반입되는 자재의 검수 기준으로 활용하기 위하여 감리

사무실에 비치한다.

- 자재의 확인

· 반입된 자재는 견본품과 일치하는지 확인 (시험성적서 및 품질관리시험

포함)후 사용하도록 한다.

· 계약자는 자재의 품질확인에 관한 기록을 보관한다.

· 기자재 입고시 참여하여 이를 검수하고, 보관관리 지도감독한다.

- 자재품질관리 계약자는 EPC사의 사용자재에 대하여 시방서, 법령에 따라

수행하는 품질관리 시험업무 및 시험성과에 관하여 검토.확인 및 지도

감독한다.

10) 안전관리

- 안전관리의 확인

계약자는 공사전반에 대한 안전관리계획의 사전검토, 실시확인 및 평가

자료의 기록유지 등 EPC사가 사고예방을 위한 안전 관리를 취하도록

한다.

- 사전검토

· EPC사의 안전관리조직 편성 및 업무분담

· 시공계획과 연계된 안전관리계획서

· 현장 안전관리 규정

· 안전관리비 집행계획

- 실시확인

· 안전관리 계획서의 이행여부 및 여건 변동시 계획

· 안전점검 계획 수립 및 실시여부

· 안전관리교육의 실시여부

· 위험장소 및 작업에 대한 안전조치

· 안전표지 부착, 안전통로, 자재의 적치 및 정리정돈

· 안전관리비의 집행

- 기록유지(안전관리 문서)

계약자는 공사현장의 안전관리를 위하여 다음 자료들의 기록 여부를

검사, 확인 한다.

· 안전업무 기록문서

· 안전점검 일지

· 안전교육 일지

· 각종 사고보고(사고시)

· 안전관리 결과보고서

- 사고처리

계약자는 현장에서 사고가 발생하였을 경우에는 EPC사에게 즉시 필요한

응급조치를 취하도록 하고 발주자에 보고한다.

11) 환경 관리

- 환경관리 상태 확인

· 환경영향평가 협의내용 이행 및 준수여부

· 환경관리를 위한 관리조직 및 운영상태

· 환경관리에 대한 현장운영계획 동의 수립상태

· 현장자체 환경점검의 주기적 실시여부 및 미비점 개선여부

· 환경관련교육의 주기적 실시여부

· 공사현장 주변일대 청결유지상태

· 주기적인 소음.진동의 측정관리 상태

· 민원발생 예상지역 파악, 대책수립 여부

- 세부 환경 관리 항목

· 소음 및 진동 관리

· 비산 먼지 관리(페인트 비산대책 포함)

· 폐기물 관리

· 세륜, 세차 시설

· 중장비 관리 : 오일 보관 관리 및 폐유 관리여부

· 악취 및 가스

· 화학 물질 사용공사(방수 등): 보관 및 폐기 상태

· 기타 환경관련 법규 및 환경영향평가 관련 제반사항.

12) 사용승인 등 검사

계약자는 사용승인 또는 임시사용승인을 신청하는 경우 설계도서 및 품질

관리기준 등에 따라 적합 시공 여부를 검사한 후 감리보고서를 제출한다.

13) 일반행정

계약자는 EPC사가 제출하는 관련 서류의 적정성 여부를 검토하여 발주자

에게 제출 한다.(지급자재 수급요청서 및 대체사용 신청, 주요기자재 공

급원 승인요청, 각종시험 성적표, 설계 변경 여건 보고, 준공기한 연기 신청,

기성·준공 검사원, 하도급 통지 및 승인요청, 안전관리 추진 실적 보고,

확인측량 결과보고, 물량 확정보고, 품질관리 계획서 또는 시험계획서 발

파계획서 , 기타 시공과 관련된 필요 서류 도표 등)

14) 기 타

- 계약자는 EPC사로 하여금 시설장비 기능에서 시험가동이 가능한 경우

에는 사용 승인 신청이전에 예비 및 정상상태 시운전을 완료토록 하되,

정상상태에서 시험 가동이 불가능할 경우에는 예비 시운전만 시행하고

정상상태에서의 시험가동은 발주자와 협의, 별도의 기간을 정하여 실

시하도록 한다.

- 계약자는 사용승인 완료 후 EPC사가 당해 시설물을 관리할 자에게 인

계 하도록 협의 및 지시하여야 하며, 당해 현장에서 특수한 재료 혹은

공법을 적용하였을 경우 시공부위, 방법, 특성, 공사시공장소 관리상의

주의점등에 대한 기록을 인계토록 하여 유지관리, 점검이 용이하도록

협의, 지시한다.

- 기타 사항은 건축법 및 건설기술진흥법, 전력기술관리법, 정보통신공사

업법, 소방시설 공사업법, 건설사업관리 업무지침서 등에서 정한 감리

업무를 수행한다.

2.6 보고서 작성

계약자는 업무수행에 따라 다음과 같이 보고 한다.

가. 일일보고 (감리수행 일지 서면보고)

1) 보고시기 : 매일 업무 종료 전

2) 보고내용

- 금일 공사현황 및 진도율

- 금일 검사 수행 현황 및 결과

- 기타 필요한 사항

나. 주간보고 (서면보고)

1) 보고시기 : 매주 1회(금요일)

2) 보고내용

- 금주간 공사추진 현황

- 금주 품질시험 및 검측, 검사 입회 현황

- 내주공사 예정현황

- 내주 품질시험 및 검측, 검사 입회 계획

- 주간공정표 (금주, 내주)

- 하도급 거래관련 법규 위반사항 여부

- 기타 필요한 사항

다. 월간보고 (서면보고)

1) 보고시기 : 매월 말일 기준 하여 익월 7일까지

2) 보고내용

- 공사추진 현황

- 기술검토

· 시공계획서 검토서

· 시공상세도 및 승인 요청에 대한 검토결과

· 시공검측 요청에 대한 검측결과 내용

· 도면 검토 사항

· 설계변경사항 검토서

- 공정관리

· 월간 공정표(차월 계획)

· 월간 공정표(당월 실적)

· 매월 감리원 투입현황 (출근부 및 출퇴근시간 명기)

- 품질관리

· 품질시험 계획서

· 자재 적합여부 및 품질시험에 대한 시험결과 확인사항

- 자재관리

· 자재반입 현황

· 자재공급원 승인 요청·결과

- 안전관리

· 월간 안전관리 활동 현황

· 안전교육 실시 현황

· 재해예방 안전기술지도 결과보고

· 공사 사고 보고(사고시)

· 안전관리비 사용내역

- 현장관리

· 하도급 거래사항

· 각종 업무지시에 대한 처리사항

· 현장협의회 회의록

· 구조물 별 공사 현황

· 현장에 관련된 기타사항

- 기타 발주자의 지시사항 및 중요하다고 판단되는 사항 등

라. 수시보고

1) 발주자로부터 보고지시가 있을 경우

2) 본 공사 진행상 차질이 생길 우려가 있는 경우

3) 공사진행상 품질, 구조 및 성능에 저해되는 요인 발견시

4) 기타 본 공사와 관련하여 중요하다고 인정되는 경우

마. 최종보고(서면보고)

1) 보고시기 : 준공시

2) 보고내용

- 공사감리 완료보고서

- 공사감리 기록대장

- 품질시험 총괄표

- 발생품 정리부

- 지급자재 수불부

- 주요자재 검사부

- KS자재 사용 총괄표

- 검측서류

- 현장실정보고서(기술검토사항 등)

- 공사사진첩 (CD화)

- 공사감리 수시, 정기보고의 주요내용 및 조치결과

- 유지관리 지침서 제출

* 유지관리 지침서 : EPC사가 제출한 시설물의 유지관리 지침자료를 검토,

지침서를 작성하여 공사 준공 후 14 일 이내에 발주자에게 제출하도록 한다.

바. 예비준공검사 실시

준공기한 30일전에 사전 예비준공검사를 실시하고, 필요한 조치 후 그 결

과를 발주자에 제출하도록 한다.

2.7 위반사항 등 보고

가. 계약자는 과업을 수행함에 있어 건설기술진흥법 및 기타 관계법령의 규

정에 위반되거나 공사품질, 안전상 중대한 영향을 줄 것으로 예상될 경우

또는 다음의 사항에 해당되는 때에는 발주자와 협의하여 그 승인을 득한

후 시공을 중지토록하거나 재시공을 명할 수 있다.

1) 시공단계별 검측요청을 하지 않고 시공하거나, 검측결과 불합격으로 판

정된 경우

2) 부실공사 발생우려가 높거나 설계도면, 시방서, 기타 공사 관련 법령 등의

위배사항 발견시

3) 이미 시공된 부분이 잘못 시공된 것이 확인된 경우

4) 부적합한 주요 공사용자재의 사용 및 시정요구사항 불이행 시

나. 계약자는 상기 규정에 의하여 EPC사가 시정 또는 재시공 요청을 받은

후 이에 따르지 아니하거나 공사중지 요청을 받은 후 공사를 계속하는

경우에는 발주자에 위법공사 보고서를 제출한다.

1) 계약자는 공사 중 하자가 발견된 경우에는 원인을 조사하여 시정에 필요

한 조치를 제시하는 보고서를 발주자에 제출하도록 한다.

2.8 부실 감리시 제재 및 책임

가. 계약자는 감리의 잘못으로 발생되는 모든 문제에 대한 민·형사상의 책

임을 전적으로 진다.

나. 발주자는 다음 각 목에 해당하거나 기타 감리원의귀책에 의한 공사품질

이나 공정에 영향이 있을 경우 당해 용역비에서 기지급된 용역비를 추

징할 수 있다.

1) 사전 검측업무 미이행, 검토서 작성 과실 등 감리원 귀책으로 인하여 부

실 시공시

2) 주요 자재 중 부적합한 자재 사용 시

3) 안전관리 지도 소홀로 인한 재해 발생시

4) EPC사가 작성한 설계도서중 계약자의 검토, 확인 대상인 문서 검토

소홀로 문제 발생 시

5) 감리관련 법령위배 및 대내외 감사 시 부실감리 적발 시

2.9 기 타

가. 본 과업지시서에 명기하지 않은 사항은 관계법령(건설기술진흥법, 건축법,

소방시설공사업법, 전력기술관리법, 건설사업관리 업무지침서 등)의

관련 규정을 적용하며, 기타 사항은 상호 협의하여 처리하되, 협의가 이

루어 지지 않을 경우 발주자의 의견을 따른다.

나. 발주자의 사정에 의하여 과업내용이 변경될 경우 계약자는 이에 응한다.

다. 감리원은 과업수행과정에서 수집된 모든 자료에 대해서 보안을 유지

하여야 하며, 발주자의 사전 동의 없이 자료를 외부에 제공하지 않을 것임.

2.10 제출도서

사업성과물로서 제출하여야 할 도서의 부수 및 제출 기일은 다음과 같음.

도 서 명	부	제출기일	비고
가. 과업수행계획서	5	과업착수 전
나. 월간 감리보고서	5	익월 7 일 이내
다. 특별 감리보고서	5	사안 발생후 10 일이내
라. 최종 감리보고서	5	준공시
마. 공사감리기록대장	1	준공시
바. 공사감리일지	1	매일

※ 제출도서 제출시마다 전자파일도 병행하여 제출하도록 함